TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
Rua Cló vis Celane, S/N - Bairro Centro - CEP 69520-000 - Juruá - AM - www.tre-am.jus.br
 
MAPA DE ANÁLISE DE RISCOS (MAR) Nº 9/2025/50ª ZE
 
ANÁLISE DE RISCOS SIMPLIFICADA – CONTRATAÇÃO
 
PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO: Aquisição de Material de Consumo – Gêneros de Alimentação e Gás e Outros Materiais
Engarrafados.
ETAPA: Gerenciamento de Riscos.
 
MAPA DE RISCOS Atualização:
04/04/2025
Etapas da Contratação: PC - Planejamento da Contratação SF - Seleção do Fornecedor GC - Gestão do Contrato
IDENTIFICAÇÃO DO RISCO ANÁLISE RESPOSTA
Risco Descrição Etapa Consequência Probabilidade Impacto Classificação Prevenção / Responsável Contingência / Responsável
01
Impugnação do
Edital
SF
- Necessidade de
adequação do edital, caso a
impugnação seja
procedente.
- Republicação do edital.
- Atraso na execução do
objeto.
Baixa Alto Risco médio
Adequação do edital as
normas vigentes / SECOE,
ASJUR e SELIC
Revisão do edital / SECOE,
ASJUR e SELIC
02
Desinteresse do
mercado em
participar da
Licitação
SF
- Licitação deserta
- Necessidade de repetição
do certame.
- Atraso na execução do
objeto
Média Alto Risco médio
Ampla divulgação do
certame / SELIC e Cartório
Eleitoral
Realização de Contato com
fornecedores habituais do
produto / SEAQ e Cartório
Eleitoral
03
Preços ofertados são
superiores aos
valores estimados
SF
- Licitação fracassada
- Necessidade de repetição
do certame.
- Atraso na execução do
objeto
Média Alto Risco médio
Revisão dos critérios
relacionados à pesquisa de
preços / SEAQ e Cartório
Eleitoral
Realização de Nova pesquisa de
preços / SEAQ e Cartório
Eleitoral
04
Impugnação do
resultado da licitação
SF
- Atraso na execução do
objeto
Baixa Alto Risco médio
Realizar análise detalhada da
documentação e proposta
da licitante vencedora /
SELIC e Cartório Eleitoral
Convocação da licitante
classificada subsequente /
SELIC e Cartório Eleitoral
05
Atraso na
homologação da
dispensa
SF
- Atraso na execução do
objeto
Baixa Médio Risco baixo
Realizar juntada e proceder a
análise célere da
documentação do certame /
SELIC, Cartório Eleitoral,
ASJUR e ASPRES
Necessidade de revalidação da
proposta da Licitante
vencedora / SELIC e Cartório
Eleitoral
06
Atraso na entrega do
material
GC - Aplicação de penalidades Média Alto Risco alto
Entrar em contato
antecipadamente com o
fornecedor, por escrito,
quanto ao prazo de entrega
e cobrar providências /
Cartório Eleitoral
Notificar o fornecedor pelo
Atraso na execução do contrato
/ Cartório Eleitoral
07 Inexecução total da
nota de empenho
SF/ GC - Aplicação de Penalidades
- Rescisão do contrato
- Necessidade de realização
de novo certame.
 
Média Alto Risco alto Evitar contratação de
empresas que não
demonstrem possuir
capacidade técnica para
contratação / SELIC e
Cartório Eleitoral
- Verificar, durante a análise da
proposta, se o bem ofertado é
compatível com as
especificações do Termo de
Referência / SELIC e Cartório
Eleitoral
- Desclassificar empresas que
não atendam aos requisitos
solicitados no termo de
referência / SELIC e Cartório
Eleitoral
- Notificar o fornecedor pela
Inexecução do contrato /
15/04/2025, 13:55 SEI/TRE-AM - 0000473034 - Mapa de Análise de Riscos (MAR)
https://sei.tre-am.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=513081&infra_siste… 1/2
Cartório Eleitoral
08
Objeto entregue fora
das especificações
ou similaridades que
não atendam às
necessidades do
TRE-AM
GC
- Não aceitação do material
- Aplicação de penalidades
- Rescisão do contrato
- Necessidade de realização
de novo certame.
Baixa Alto Risco médio
Promover todos os
esclarecimentos sobre o
material, por ocasião da
Licitação e do
encaminhamento da Nota
de Empenho / SELIC e
Cartório Eleitoral
Notificar o fornecedor e
recusar/devolver o material
para que o mesmo seja
substituído / Cartório Eleitoral

Juruá/AM, Data da Assinatura Eletrô nica
ANA LUCIA XAVIER DE QUEIROZ
CHEFE DE CARTÓRIO
Documento assinado eletronicamente em 14/04/2025, à s 14:42, conforme artigo 1º, §2, III, b, da Lei nº
11.419/2006 .
A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tre-am.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 0000473034 e o código CRC
74A2F78B.
Processo nº 0005296-56.2025.6.04.0050 Nú mero Geral: 0000473034 versã o: 2
15/04/2025, 13:55 SEI/TRE-AM - 0000473034 - Mapa de Análise de Riscos (MAR)
https://sei.tre-am.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=513081&infra_siste… 2/2